SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI: 
		POŻAROWE  WYDZIELENIE  KLATKI  SCHODOWEJ

ADRES INWESTYCJI: 	KOZIENICE  ul. GŁOWACZOWSKA 33
				PAŃSTWOWE GIMNAZJUM nr 2

KOD CPV:	     

INWESTOR: URZĄD MIASTA w KOZIENICACH
		26-900 KOZIENICE ul. PARKOWA

								opracował:

grudzień 2004r
SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 
W  ZAKRESIE  ROBÓT  BUDOWLANYCH

	Do każdej z niżej podanych Specyfikacji Technicznych w zakresie poszczególnych robót mają zastosowanie ustalenia i wymagania zawarte w Specyfikacji Ogólnej B-00.00.00. 

             ROBOTY  MUROWE

1. Nadproże
	Nadproże - stalowe otworu Lo=1.60 m składa się z belki stalowej z 2 ceowników 180 skręconych 4 śrubami M16.
   Podstemplować płytę spocznika schodów, wykonać bruzdy pod ceowniki, wywiercić otwory, założyć ceowniki i śruby, ściągnąć je nakrętkami, wyciąć otwór, stal zabezpieczyć antykorozyjnie. Belkę wyszpałdować, podwójnie osiatkować i otynkować tynkiem gr. 2cm.

2. Ścianka działowa
	Ścianka działowa - murowana z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej o Rz-5MPa.
	Roboty murowe wykonywać zgodnie z normami PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły, wymagania i badania przy odbiorze.
	Ściankę posadowić bezpośrednio na stropie żelbetowym po wycięciu posadzki i podłoży podłogi pływającej.
	Ściankę kotwić do istniejącej ściany kotwami Æ8 wklejając je na klej na głębokość 10cm.
	Wymiar ścianki ustalić mając informację od producenta drzwi o dokładnych wymiarach zewnętrznych ościeżnicy i tolerancji otworu dla uzyskania szczelnego styku.

     ŚCIANA  Z  PŁYT  GIPSOWO-KARTONOWYCH

	Przyjęto ścianę o pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej z okładziną pojedynczą z płyt ognioodpornych GKF tworzącą w całości ścianę o odporności pożarowej REI 60.

1. Konstrukcja nośna
	Profile metalowe powinny odpowiadać AT-15-3448/99, ocynkowane, walcowane na zimno, cienkościenne profile z blachy stalowej o gr. 0.6mm.
	Profil UW 100 - krawędziowy i przyłączeniowy do podłóg, ścian i stropów. 
	Profil CW 100 - pionowy do ścian.
W tym przypadku należy zagęścić rozstaw rusztu do 300mm.
	Jako elementy montażowe do ścian i stropów stosować kołki rozporowe wbijane, średnica wiertła 6mm, rozstaw < 1000mm.
	Na profile stykające się ze ścianami i stropami nakleić taśmę uszczelniającą.

2. Okładzina
	Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać PN-B/79405. Zgodnie z normą PN-96/B-02874 należą one do materiałów budowlanych niepalnych.
	Płyta GKF - gr. 12.5mm, płyta o szarym kolorze kartonu z czerwonymi napisami, rdzeń gipsowy dodatkowo zbrojony włóknem szklanym. Mocowanie za pomocą blachowkrętów o długości 25mm w odstępach <250mm. Należy zachować odstęp wkrętów od krawędzi płyty: <10mm dla krawędzi osłoniętej kartonem, <15mm dla krawędzi nie osłoniętej kartonem.
	Układanie płyt na drugiej stronie ściany rozpocząć od płyty przyciętej do połowy standardowej szerokości (600mm).
	Płyty g-k przenosić ręcznie w pozycji pionowej, zwracać uwagę by nie uszkodzić krawędzi i naroży. Składowanie w pozycji poziomej na płaskim i równym podłożu (palecie) lub na kantówkach rozmieszczonych co 50cm.
	Płyty i akcesoria należy chronić przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi, produkty gipsowe należy przechowywać w suchych pomieszczeniach.
	Roboty należy wykonywać w warunkach pomiędzy 40-80% wilgotności względnej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia +10 - +45°C.

3. Spoinowanie
	Spoinowanie masą szpachlową z użyciem taśmy zbrojącej z papieru, czas obróbki ~60 minut.
	Pierwsze ułożenie masy poprzecznie do styku płyt z wciskaniem masy w szczelinę, następnie należy ułożyć na świeżym podkładzie taśmę i wyrównać. Po ~90 minutach usunąć niepotrzebne naddatki masy szpachlowej.
	Wygładzić ruchem jednostajnym spoinę przy użyciu masy wykończeniowej np. Nida planfix B fresh, w razie potrzeby styk szlifować.
	Taśmą zbrojącą należy też uszczelnić styki ścianki z elementami istniejącego budynku, a następnie zaszpachlować.
	Uwzględnić warunki ramowe zawarte w Klasyfikacji Ogniowej ITB nr NP-784.1/00/BW.

4. Wypełnienie
	Na wypełnienie ścianki zastosować wełnę mineralną twardą o minimalnej grubości 40mm i gęstości >35 kg/m3.

45410000 - TYNKOWANIE - TYNKI ZWYKŁE

1. Wstęp
	Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.
	Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
	Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p.3. “Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.”
	Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.
	Podłoża w zależności od rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

2. Materiały
2.1. Zaprawy
	Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 “Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda
	Do przygotowania zapraw i skraplania stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 ?Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
	Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.3. Piasek
	Piasek powinien spełnić wymagania normy PN-79/B-06711 “Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególności 
- nie zawierać domieszek organicznych
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5mm, piasek średnioziarnisty 0.5-1.0mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0mm.
	Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1. do warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0.5mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
	Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 “Zaprawy budowlane zwykłe”
	Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
	Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.
	Do zaprawy tynkarskiej stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
	Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701;1997 “Cementy powszechnego użytku”
	Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub plastyfikatory w ilościach podanych w instrukcjach i wytycznych producenta.
	Skład objętościowy składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy.

2.6. Gotowe mieszanki
	Zaprawa tynkarska drobnokruszywowa cementowo-wapienna np. “Atlas” - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypełniaczami i dodatkami uszlachetniającymi.
	Po dodaniu wody zgodnie z instrukcją powinna tworzyć masę wygodną w pracy, plastyczną i o dobrej przyczepności do podłoża.
	Grubość warstwy od 6 do 30mm.

2.7 Zaprawa gipsowa
	Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypełniaczami i dodatkami uszlachetniającymi.
	Po dodaniu wody zgodnie z instrukcją powinna tworzyć masę wygodną w pracy, plastyczną i o dobrej przyczepności do podłoża.
	Przestrzegać czasu gotowości mieszanki do użycia.

3. Sprzęt
	Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- mieszarki do zapraw
- przenośnych zbiorników na wodę
- kielnia i paca styropianowa

4. Transport
	Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 
	Materiały workowane, w tym gotowe mieszanki, można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
	Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonywanie robót
	Wszystkie prace prowadzić zgodnie z technologią robót tynkarskich. Tynk narzucać równomiernie i jej nadmiar zbierać pacą styropianową lub listwami prowadzącymi.
	Zacieranie powierzchni należy określić doświadczalnie, by nie nastąpiło przesuszenie tynku.
	W czasie wysychania tynku zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń.

    MALOWANIE

1. Podłoże
	Podłoże powinno być gładkie, mocne, niepylące, bez spękań i rozwarstwień oraz czyste i suche.
	Po wszystkich robotach instalacyjnych i tynkarskich sprawdzić równość powierzchni, ewentualnie je dodatkowo uzupełnić i wygładzić. Odczekać do wyschnięcia naprawianych miejsc. 

2. Gruntowanie
	Całą powierzchnię nowych tynków cementowo-wapiennych, gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych zagruntować środkiem gruntującym dla wyrównania różnej chłonności podłoży.

3. Malowanie 
	Malowanie powierzchni 2x farbami emulsyjnymi na biało.
	Uzupełnić malowanie lamperii olejnej na ściance działowej z cegły. kolor jasnoszary zbliżony do istniejącej, wysokość ~1.50m.

    STOLARKA  DRZWIOWA

1. Przeciwpożarowe drzwi stalowe pełne EI 30 jednoskrzydłowe
	Wymiary otworów drzwiowych nietypowe, drzwi na zamówienie:
- otwór     75 x 155 cm		1 szt. prawe
- otwór   112 x 225 cm		3 szt. prawe
	Drzwi klasy odporności ogniowej EI 30 zgodnie z Aprobatą techniczną ITB nr AT-15-2841/99 oraz Certyfikatem zgodności ITB-568/W/03.
	Drzwi charakteryzować ma duża wytrzymałość mechaniczna, podwyższona odporność na działanie czynników chemicznych oraz specjalne wykończenie powierzchni skrzydła.
	Skrzydła drzwiowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0.7mm z wypełnieniem wełną mineralną o gęstości min 100 kg/m3. Grubość skrzydła 48mm.
Skrzydła wzmocnione blachą w miejscu mocowania zawiasów, zamków, samozamykaczy. W miejscu zamka dodatkowe wbudowanie płyty gipsowo-kartonowej.
	Płaszcz skrzydła gruntowany farbą poliestrową. Dodatkowo malowany farbą proszkową w kolorze jasnoszarym.
	Zawiasy wzmocnione nośne z tulejkami łożyskowymi, jeden z nich ze sprężyną gwarantującą samozamykanie drzwi - pełniący funkcję samozamykacza.
	Zamki wpuszczane z wkładką patentową.
	Klamka z tworzywa termoplastycznego z rdzeniem stalowym. Całość o zaokrąglonych kształtach.
	Ościeżnice stalowe, profil z blachy o gr. 1.5mm, wewnętrzne, mocowane do ścian kołkami rozporowymi, wyposażone w pasek pęczniejący.

2. Przeciwpożarowe drzwi stalowe pełne EI 30 dwuskrzydłowe
	Opis dotyczący aprobat, materiałów itd. jak wyżej.
	Wymiary otworów drzwiowych:
- otwór ~215 x 206 cm	  3 szt. prawe	skrzydła “100 + 100” typowe
- otwór ~175 x 206 cm	  1 szt. prawe	skrzydła “100 + 65”   na zamówienie
	Drzwi z przeszkleniem w szerszym skrzydle w wymiarach standardowych 360x1160mm szkłem zespolonym ognioodpornym i bezpiecznym. Mocowanie do skrzydła za pomocą profili stalowych skręcanych śrubami z odpowiednią uszczelką.
	Wyposażenie dodatkowe w regulatory kolejności zamykania skrzydeł oraz trzymacze elektomagnetyczne utrzymujące drzwi w pozycji “stale otwarte”.

3. Drzwi zewnętrzne aluminiowe
	Wymiary otworu ~160 x 206 cm.
	Wymiary drzwi dostosować do wymiarów w naturze po wykonaniu nadproża oraz przy wykorzystaniu istniejącego skrzydła drzwi z demontażu. 
	Drzwi aluminiowe pełne, ocieplone w kolorze brązowym, ościeżnica wewnętrzna.
	Wyposażenie w zamek z wkładką patentową plus zamek “Gerda”. 

4. Drzwi drewniane
	Istniejące drewniane płycinowe malowane olejno, ościeżnica drewniana, skrzydła do przełożenia z demontażu.
	Na ościeżnicy zmiana zawiasów i kieszeni zamka, naprawa uszkodzeń. 
	Po wykonaniu robót stolarskich malowanie skrzydeł drzwiowych i ościeżnicy farbą olejną.

    STOLARKA OKIENNA

	Otwór okienny 180 x 223 cm.
	Istniejące okna z profili pvc białe, wymienić na nowe o takim samym podziale i z tych samych profili, z wykonaniem kwater uchylnych wg rysunku wraz z montażem siłowników. Szyby zespolone termoizolacyjne jak w istniejących oknach.
	Okno należy tak wykonać by uchylanie odbywało się bezawaryjnie.
	Na ramiakach okna montować elektryczny siłownik łańcuchowy o wysięgu min 37cm, wyposażenie w wyłączniki krańcowe. Obudowa malowana proszkowo na kolor biały.

    ROBOTY RÓŻNE

1. Posadzki
	Podłogi - po wykonaniu ścianek uzupełnić cokół z płytek ceramicznych na ściance na parterze oraz drewniane listwy przypodłogowe na ściankach pięter.

2. Kraty 
	Kraty - po zdemontowaniu kraty na schodach na strych przenieść ją niżej i ponownie zamontować dla ochrony okna z siłownikami przed ewentualną manipulacją ze strony młodzieży.
	Zdemontować wszystkie kraty na parterze na drodze ewakuacyjnej.